구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	④번 옹벽	균열보수	36.3	m

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	⑤번 옹벽	균열보수	67.7	m
		표면보수	3.51	㎡

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	⑥번 옹벽	균열보수	5.5	m
		철근노출단면복구	0.5	㎡

구 분	위 치	공 사 내 용	수량	단위	KEY PLAN
	⑦번 옹벽	표면보수	0.90	㎡
		단면복구	0.04	㎡
	합 계	균열보수 표면보수 단면복구 철근노울 단면복구	183.3 13.62 4.55 1.96	m ㎡ ㎡ ㎡

공 종	보할 (%)	공 사 기 간 (2개월)				비 고
		15일	30일	45일	60일
1. 보강공	63.4	21.1	21.1	21.1
2. 보수공	17.0	5.7	5.7	5.7
3. 부대공	19.6	4.9	4.9	4.9	4.9
월 별 진 도	100.0	31.7	31.7	31.7	4.9
누 계 진 도	100.0	31.7	63.4	95.1	100.0
◈ 수련관 운영일정을 반영하여 공정표는 수정 될수 있슴.

예   정  공  정  표

2014년 금정청소년수련관 옹벽 보수•보강사업

<　공 사 개 요 >

２０１４․　０８